ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP	číslo ZL: 04	
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, IČ 46342796	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Říha	
Datum: 	03.04.2024	

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: 
Změny, které vznikly v průběhu realizace díla, specifikované ve změnových listech č. ZL 01 - 13
Popis a zdůvodnění změny:                             
   Navýšení ceny prací  a dodávek nad specifikaci rozsahu v SoD  vyvstalo zejména instalací     systému automatického ovládání vnitřního osvětlení v ostatních prostorách ubytoven,     
   umožňující automatickou detekcí osob, stmívání s udržováním konstantního světelného toku  
   s dynamickým způsobem ovládání na základě úrovně denního osvětlení a změnou koncepce 
   ukládání přebytků energie z FVE umístěných na střechách ubytoven – místo původně 
   navrhovaných lokálních úložišť v jednotlivých budovách ubytoven bude zřízeno centrální   
   bateriové úložiště v nově zřízeném objektu /kontejneru/

Součástí ZL04 jsou změny projektu, které:
-	vyvstaly v průběhu přípravných prací (např. změna č. XX,…), 
-	vyvstaly v průběhu jeho realizace (např. změna č.XX,...),
-	vyvstaly na základě aktuálních potřeb, tedy požadavku investora (např. změna č. XX,…), 
-	nebyly součástí stávající PD, a bylo nezbytné je pro řádné dokončení díla realizovat, tak aby byla zajištěna jeho správná funkčnost celku (např. změna č. XX,..).

Výše uvedené změny, které jsou součástí ZL 04, jsou nezbytné, pro zajištění správné funkčnosti celku a jeho následného provozu v rámci udržitelnosti projektu i po jeho skončení.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:

8.309.319,28 Kč	Cena víceprací bez DPH:

15.605.664,75 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

7.296.345,47  Kč	Dodatečné stavební práce a dodávky jsou bez vlivu na konečný termín dokončení díla                                          	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

	

Datum: 	

Datum: 	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):